승학산·동매산·아미산 둘레길 조성

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 변화하는 산행문화 경향에 맞춰 모든 계층이 쉽고 편리하게 산을 찾고 즐길 수 있는 안전하고 쾌적한 산행 환경 제공

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 승학산, 동매산, 아미산

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2018. 8

❍ 총사업비 : 22.5억원(국비 1, 시비 0.7, 구비 15.8 기타(특교세 5))

❍ 사업내용 : 숲길조성 5.4km, 숲길정비 23.9km, 쉼터 조성 20개소 등

▣ 추진상황

❍ 2017.  1. 12. : 사업계획 수립

❍ 2017.  2. 21. : 실시설계 용역 착수(완료 : `17. 11 . 22.)

❍ 2017.  5. 25. ~ 6. 30. : 현장 답사(8회) 및 노선 확정

❍ 2017.  7.  3. : 주민설명회 개최

❍ 2017.  8. ~ 9. : 토지 소유주 동의 요청

❍ 2017.  7. ~ 9. : 사업계획 고시 공고

❍ 2017.  9.  8. : 제2차 자문단 회의(제1차 : `17. 4 . 28.)

❍ 2017. 11. ~ 12. : 공사 착공

❍ 2018.  2. ~  3. : 도급공사 준공

❍ 2018.  7. 31. : 사업 완료

▣ 기대효과

❍ 산지별 단절된 숲길을 연결하고 새로운 노선을 발굴하여 누구나 쉽고

편리하게 이용할 수 있는 소통의 장으로 활용

❍ 맨발 숲길, 전망대 등 특색있는 시설을 설치로 다양한 볼거리, 즐길거리

□ 사업명 : 승학산·동매산·아미산 둘레길 조성

≪ 위 치 도 ≫

승학산

아미산

동매산

≪ 현 장 사 진 ≫

승학산	동매산	아미산